Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210423)	
	
(наименование стройки)	
	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	1	
Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка 74:36:0603003:3276 по адресу: г. Челябинск, СНТ «Любитель 1», ул. 8, участок 677. Технологическое присоединение.	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	551-66-2021-ГСН		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	07.2021	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	1 716.35 (241.33)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	1 328.87 (151.18)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	91.75 (5.21)	тыс. руб.	
монтажных работ	387.47 (90.16)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	423.4982694	чел.-ч.	
оборудования		тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	224.5742047	чел.-ч.	
прочих затрат		тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Земляные работы	
1	ТЕР 01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.12		0.12					5 167	
	1	ОТ					2 445.28		293.43	17.61	5 167	
	3	ЭМ								8.02		
	2	в т. ч. ОТм								17.61		
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	248.00		29.76						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					2 445.28		293.43		5 167	
		ФОТ							293.43		5 167	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			234.74		4 134	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			132.04		2 325	
		Всего по позиции							660.21		11 626	
2	ТЕР 01-01-009-24	Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.1945		0.1945					9 975	
	1	ОТ								17.61		
	3	ЭМ					6 394.65		1 243.76	8.02	9 975	
	2	в т. ч. ОТм					1 047.71		203.78	17.61	3 589	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	74.73		14.53						
		Итого по расценке					6 394.65		1 243.76		9 975	
		ФОТ							203.78		3 589	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			193.59		3 410	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			101.89		1 795	
		Всего по позиции							1 539.24		15 180	
3	ТЕР 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.5		0.5					3 846	
	1	ОТ					105.37		52.69	17.61	928	
	3	ЭМ					39.04		19.52	8.02	157	
	2	в т. ч. ОТм					4.26		2.13	17.61	38	
	4	М					1 287.00		643.50	4.29	2 761	
		ЗТ	чел.-ч	10.20		5.10						
		ЗТм	чел.-ч	0.35		0.18						
		Итого по расценке					1 431.41		715.71		3 846	
		ФОТ							54.82		966	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			71.27		1 256	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			48.79		860	
		Всего по позиции							835.77		5 962	
4	ТЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.12		0.12					1 947	
	1	ОТ					921.46		110.58	17.61	1 947	
	3	ЭМ								8.02		
	2	в т. ч. ОТм								17.61		
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	97.20		11.66						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					921.46		110.58		1 947	
		ФОТ							110.58		1 947	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			88.46		1 558	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			49.76		876	
		Всего по позиции							248.80		4 381	
5	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	13.2		13.2	117.00		1 544.40	4.29	6 625	
		Формула ценообразования: 74.39 + 41.12 + 1.49(2%)	
		Всего по позиции							1 544.40		6 625	
6	ТЕР 01-01-033-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.1895		0.1895					1 124	
	1	ОТ								17.61		
	3	ЭМ					739.81		140.19	8.02	1 124	
	2	в т. ч. ОТм					145.25		27.52	17.61	485	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	10.36		1.96						
		Итого по расценке					739.81		140.19		1 124	
		ФОТ							27.52		485	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			26.14		461	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			13.76		243	
		Всего по позиции							180.09		1 828	
7	ТЕР 01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4	100 м3 уплотненного грунта	1.895		1.895					9 009	
	1	ОТ					161.27		305.61	17.61	5 382	
	3	ЭМ					238.66		452.26	8.02	3 627	
	2	в т. ч. ОТм					44.14		83.65	17.61	1 473	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	14.96		28.35						
		ЗТм	чел.-ч	3.63		6.88						
		Итого по расценке					399.93		757.87		9 009	
		ФОТ							389.26		6 855	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			369.80		6 512	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			194.63		3 428	
		Всего по позиции							1 322.30		18 949	
8	ТССЦпг 01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	30.6		30.6					151	
	1	ОТ								1		
	3	ЭМ					4.23		129.44	1	129	
	2	в т. ч. ОТм					0.47		14.38	1	14	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	0.03		0.89						
		Итого по расценке					4.98		152.45		151	
		ФОТ							14.38		14	
	МДС 81-33.2004	НР	%	100		100			14.38		14	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			8.63		8	
		Всего по позиции							152.45		151	
9	ТССЦпг 03-01-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	1 т груза	30.6		30.6	17.27		528.46	1	528	
		Всего по позиции							528.46		528	
10	ТЕР 01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.017		0.017					60	
	1	ОТ					35.99		0.61	17.61	11	
	3	ЭМ					357.63		6.08	8.02	49	
	2	в т. ч. ОТм					64.83		1.10	17.61	19	
	4	М					4.88		0.08	4.29		
		ЗТ	чел.-ч	3.65		0.06						
		ЗТм	чел.-ч	3.97		0.07						
		Итого по расценке					398.50		6.77		60	
		ФОТ							1.71		30	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			1.62		29	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			0.86		15	
		Всего по позиции							9.25		104	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		5 493.62		38 432	
		в том числе					
		оплата труда		762.92		13 435	
		эксплуатация машин и механизмов		1 861.81		14 932	
		материальные ресурсы		2 187.98		9 386	
		перевозка		680.91		679	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		1 081.10		19 039	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		985.62		17 360	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		541.73		9 542	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		7 020.97		65 334	
Раздел 2. ГНБ	
11	ТЕР 04-01-074-01	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	1 машина	1		1					16 031	
	1	ОТ					337.21		337.21	17.61	5 938	
	3	ЭМ					1 258.50		1 258.50	8.02	10 093	
	2	в т. ч. ОТм					84.92		84.92	17.61	1 495	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	26.51		26.51						
		ЗТм	чел.-ч	5.20		5.20						
		Итого по расценке					1 595.71		1 595.71		16 031	
		ФОТ							422.13		7 433	
	МДС 81-33.2004	НР	%	112		112			472.79		8 325	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	51		51			215.29		3 791	
		Всего по позиции							2 283.79		28 147	
12	ТЕР 04-01-076-01	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE	100 м бурения скважины	2.161		2.161					167 080	
	1	ОТ					130.51		282.03	17.61	4 967	
	3	ЭМ					9 351.30		20 208.16	8.02	162 069	
	2	в т. ч. ОТм					178.38		385.48	17.61	6 788	
	4	М					4.76		10.29	4.29	44	
	ТССЦ 110-0199	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	т	П		П						
	ТССЦ 407-0005	Глина бентонитовая	т	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	9.97		21.55						
		ЗТм	чел.-ч	10.01		21.63						
		Итого по расценке					9 486.57		20 500.48		167 080	
		ФОТ							667.51		11 755	
	МДС 81-33.2004	НР	%	112		112			747.61		13 166	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	51		51			340.43		5 995	
		Всего по позиции							21 588.52		186 241	
13	ТЕР 04-01-077-09	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм (Ду 110)	100 м бурения скважины	2.161		2.161					732 186	
	1	ОТ					1 064.79		2 301.01	17.61	40 521	
	3	ЭМ					39 540.96		85 448.01	8.02	685 293	
	2	в т. ч. ОТм					1 162.84		2 512.90	17.61	44 252	
	4	М					687.35		1 485.36	4.29	6 372	
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	П		П						
	ТССЦ 110-0199	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	т	П		П						
	ТССЦ 407-0005	Глина бентонитовая	т	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	83.71		180.90						
		ЗТм	чел.-ч	71.78		155.12						
		Итого по расценке					41 293.10		89 234.38		732 186	
		ФОТ							4 813.91		84 773	
	МДС 81-33.2004	НР	%	112		112			5 391.58		94 946	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	51		51			2 455.09		43 234	
		Всего по позиции							97 081.05		870 366	
14	ТССЦ 109-0012	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	2.46354		2.46354	1 180.00		2 906.98	4.29	12 471	
		Формула ценообразования: 1080.02 + 78.38 + 21.6(2%)	
		Всего по позиции							2 906.98		12 471	
15	ТССЦ 110-0199	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	т	0.4322		0.4322	75 642.27		32 692.59	4.29	140 251	
		Формула ценообразования: 73600 + 570.27 + 1472(2%)	
		Всего по позиции							32 692.59		140 251	
16	Прайс.	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 90х8.2 мм (707/4.29*1.05)	м	280		280			48 451.75	4.29	207 858	
		Корректировка М					=173.041958041958					
		Всего по позиции							48 451.75		207 858	
17	ТЕР 04-01-075-01	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	1 машина	1		1					9 100	
	1	ОТ					176.31		176.31	17.61	3 105	
	3	ЭМ					747.56		747.56	8.02	5 995	
	2	в т. ч. ОТм					42.13		42.13	17.61	742	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	14.06		14.06						
		ЗТм	чел.-ч	2.58		2.58						
		Итого по расценке					923.87		923.87		9 100	
		ФОТ							218.44		3 847	
	МДС 81-33.2004	НР	%	112		112			244.65		4 309	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	51		51			111.40		1 962	
		Всего по позиции							1 279.92		15 371	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		196 305.76		1 284 977	
		в том числе					
		оплата труда		3 096.56		54 531	
		эксплуатация машин и механизмов		107 662.23		863 450	
		материальные ресурсы		85 546.97		366 996	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		6 121.99		107 808	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		6 856.63		120 746	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		3 122.21		54 982	
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		206 284.60		1 460 705	
Раздел 3. Газопровод низкого давления	
18	ТЕР 24-02-031-01	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм	100 м укладки	0.01		0.01					20	
	1	ОТ					76.72		0.77	17.61	14	
	3	ЭМ					70.58		0.71	8.02	6	
	2	в т. ч. ОТм								17.61		
	4	М					5.27		0.05	4.29		
	ТССЦ 507-9110	Трубы полиэтиленовые для газопроводов	м	100								
		ЗТ	чел.-ч	5.70		0.06						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					152.57		1.53		20	
		ФОТ							0.77		14	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			1.00		18	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			0.69		12	
		Всего по позиции							3.22		50	
19	Прайс.	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5.8 мм (349/4.29*1.05)	м	1		1			85.42	4.29	366	
		Корректировка М					=85.4195804195804					
		Всего по позиции							85.42		366	
20	ТЕР 24-02-031-02	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 110 мм	100 м укладки	0.639		0.639					1 359	
	1	ОТ					80.76		51.61	17.61	909	
	3	ЭМ					76.76		49.05	8.02	393	
	2	в т. ч. ОТм								17.61		
	4	М					20.75		13.26	4.29	57	
	ТССЦ 507-9110	Трубы полиэтиленовые для газопроводов	м	100								
		ЗТ	чел.-ч	6.00		3.83						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					178.27		113.92		1 359	
		ФОТ							51.61		909	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			67.09		1 182	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			45.93		809	
		Всего по позиции							226.94		3 350	
21	ТЕРм 10-06-048-05	Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	1 км кабеля	0.06		0.06					291	
	1	ОТ			0.3		292.56		5.27	17.61	93	
	3	ЭМ			0.3		1 368.96		24.64	8.02	198	
	2	в т. ч. ОТм			0.3		136.87		2.46	17.61	43	
	4	М			0.3		5.85		0.11	4.29		
		ЗТ	чел.-ч	23.00	0.3	0.41						
		ЗТм	чел.-ч	9.04	0.3	0.16						
		Итого по расценке					1 667.37		30.02		291	
		ФОТ							7.73		136	
	МДС 81-33.2004	НР	%	100		100			7.73		136	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	65		65			5.02		88	
		Всего по позиции							42.77		515	
22	ТССЦ 507-3538	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	м	60		60	0.30		18.00	4.29	77	
		Формула ценообразования: 0.29 + 0.01(2%)	
		Всего по позиции							18.00		77	
23	ТЕР 27-09-004-01	Установка столбиков сигнальных железобетонных	100 шт.	0.01		0.01					421	
	1	ОТ					759.42		7.59	17.61	134	
	3	ЭМ					3 046.09		30.46	8.02	244	
	2	в т. ч. ОТм					349.22		3.49	17.61	61	
	4	М					1 010.46		10.10	4.29	43	
	ТССЦ 403-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	71.04		0.71						
		ЗТм	чел.-ч	22.53		0.23						
		Итого по расценке					4 815.97		48.15		421	
		ФОТ							11.08		195	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			15.73		277	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			10.53		185	
		Всего по позиции							74.41		883	
24	ТССЦ 403-1220	Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	1		1	169.39		169.39	4.29	727	
		Формула ценообразования: 161.6 + 4.56 + 3.23(2%)	
		Всего по позиции							169.39		727	
25	ТССЦ 401-0104	Бетон дорожный, класс В10 (М150)	м3	0.07		0.07	589.00		41.23	4.29	177	
		Формула ценообразования: 564.58 + 13.13 + 11.29(2%)	
		Всего по позиции							41.23		177	
26	ТЕР 27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011	100 знаков	0.01		0.01					152	
	1	ОТ					743.82		7.44	17.61	131	
	3	ЭМ								8.02		
	2	в т. ч. ОТм								17.61		
	4	М					489.12		4.89	4.29	21	
	ТССЦ 101-9610	Щитки металлические	шт.	100								
		ЗТ	чел.-ч	69.00		0.69						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					1 232.94		12.33		152	
		ФОТ							7.44		131	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			10.56		186	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			7.07		124	
		Всего по позиции							29.96		462	
27	ТССЦ 101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	2.4		2.4	6.74		16.18	4.29	69	
		Формула ценообразования: 6.59 + 0.02 + 0.13(2%)	
		Всего по позиции							16.18		69	
28	ТССЦ 105-0217	Табличка	100 шт.	0.01		0.01	4 590.00		45.90	4.29	197	
		Формула ценообразования: 4154.03 + 352.89 + 83.08(2%)	
		Всего по позиции							45.90		197	
29	ТЕР 24-02-060-01	Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм	10 вводов	0.1		0.1					5 459	
	1	ОТ					1 039.22		103.92	17.61	1 830	
	3	ЭМ					892.82		89.28	8.02	716	
	2	в т. ч. ОТм					11.64		1.16	17.61	20	
	4	М					6 789.97		679.00	4.29	2 913	
	ТССЦ 103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	52.52								
		ЗТ	чел.-ч	88.52		8.85						
		ЗТм	чел.-ч	0.71		0.07						
		Итого по расценке					8 722.01		872.20		5 459	
		ФОТ							105.08		1 850	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			136.60		2 405	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			93.52		1 647	
		Всего по позиции							1 102.32		9 511	
30	Прайс.	Цокольный ввод, Прайс цена 6200 без НДС (6200/4.29*1.05)	шт.	1		1			1 517.48	4.29	6 510	
		Корректировка М					=1517.48251748252					
		Всего по позиции							1 517.48		6 510	
31	ТЕР 24-02-002-03	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 90 мм	1 соединение	22		22					40 112	
	1	ОТ					27.76		610.72	17.61	10 755	
	3	ЭМ					28.74		632.28	8.02	5 071	
	2	в т. ч. ОТм								17.61		
	4	М					257.32		5 661.04	4.29	24 286	
		ЗТ	чел.-ч	1.98		43.56						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					313.82		6 904.04		40 112	
		ФОТ							610.72		10 755	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			793.94		13 982	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			543.54		9 572	
		Всего по позиции							8 241.52		63 666	
32	ТЕР 24-02-007-02	Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 90х63 мм	1 соединение	1		1					437	
	1	ОТ					18.33		18.33	17.61	323	
	3	ЭМ					12.49		12.49	8.02	100	
	2	в т. ч. ОТм								17.61		
	4	М					3.16		3.16	4.29	14	
	ТССЦ 507-9503	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями	шт.	1								
		ЗТ	чел.-ч	1.40		1.40						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					33.98		33.98		437	
		ФОТ							18.33		323	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			23.83		420	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			16.31		287	
		Всего по позиции							74.12		1 144	
33	ТССЦ 507-0855	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90х63 мм	шт.	1		1	721.46		721.46	4.29	3 095	
		Формула ценообразования: 707.22 + 0.1 + 14.14(2%)	
		Всего по позиции							721.46		3 095	
34	ТЕР 22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	1 т фасонных частей	0.000438		0.000438					107	
	1	ОТ					4 960.28		2.17	17.61	38	
	3	ЭМ					11 806.75		5.17	8.02	41	
	2	в т. ч. ОТм					1 684.60		0.74	17.61	13	
	4	М					14 919.40		6.53	4.29	28	
	ТССЦ 507-9506	Фланцы стальные	компл.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	353.80		0.15						
		ЗТм	чел.-ч	103.16		0.05						
		Итого по расценке					31 686.43		13.87		107	
		ФОТ							2.91		51	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			3.78		66	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			2.59		45	
		Всего по позиции							20.24		218	
35	ТССЦ 507-3020	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 25 мм	шт.	1		1	19.23		19.23	4.29	82	
		Формула ценообразования: 17.85 + 1.02 + 0.36(2%)	
		Всего по позиции							19.23		82	
36	ТССЦ 301-3240	Колпачки	шт.	1		1	2.59		2.59	4.29	11	
		Формула ценообразования: 2.53 + 0.01 + 0.05(2%)	
		Всего по позиции							2.59		11	
37	ТССЦ 507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-25х1,6 мм	шт.	1		1	42.50		42.50	4.29	182	
		Формула ценообразования: 41.64 + 0.03 + 0.83(2%)	
		Всего по позиции							42.50		182	
38	ТЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0.01		0.01					278	
	1	ОТ					795.26		7.95	17.61	140	
	3	ЭМ					430.27		4.30	8.02	34	
	2	в т. ч. ОТм								17.61		
	4	М					2 433.91		24.34	4.29	104	
		ЗТ	чел.-ч	65.40		0.65						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					3 659.44		36.59		278	
		ФОТ							7.95		140	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			6.36		112	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			4.77		84	
		Всего по позиции							47.72		474	
39	ТССЦ 507-2631	Штуцер	шт.	1		1	44.81		44.81	4.29	192	
		Формула ценообразования: 43.71 + 0.23 + 0.87(2%)	
		Всего по позиции							44.81		192	
40	ТЕР 22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	0.5		0.5					1 537	
	1	ОТ					55.06		27.53	17.61	485	
	3	ЭМ					262.27		131.14	8.02	1 052	
	2	в т. ч. ОТм					42.62		21.31	17.61	375	
	4	М								4.29		
	ТССЦ 302-9490	Фасонные части	шт.	10								
		ЗТ	чел.-ч	4.80		2.40						
		ЗТм	чел.-ч	2.61		1.31						
		Итого по расценке					317.33		158.67		1 537	
		ФОТ							48.84		860	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			63.49		1 118	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			43.47		765	
		Всего по позиции							265.63		3 420	
41	ТССЦ 507-0722	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1		1	26.36		26.36	4.29	113	
		Формула ценообразования: 25.83 + 0.01 + 0.52(2%)	
		Всего по позиции							26.36		113	
42	ТССЦ 507-0723	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 90 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1		1	103.75		103.75	4.29	445	
		Формула ценообразования: 101.67 + 0.05 + 2.03(2%)	
		Всего по позиции							103.75		445	
43	ТССЦ 507-0782	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1		1	101.47		101.47	4.29	435	
		Формула ценообразования: 99.44 + 0.04 + 1.99(2%)	
		Всего по позиции							101.47		435	
44	ТССЦ 507-0819	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм	шт.	2		2	528.18		1 056.36	4.29	4 532	
		Формула ценообразования: 517.78 + 0.04 + 10.36(2%)	
		Всего по позиции							1 056.36		4 532	
45	ТЕРм 08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0.011		0.011					61	
	1	ОТ					253.26		2.79	17.61	49	
	3	ЭМ					85.66		0.94	8.02	8	
	2	в т. ч. ОТм					4.08		0.04	17.61	1	
	4	М					85.18		0.94	4.29	4	
		ЗТ	чел.-ч	21.30		0.23						
		ЗТм	чел.-ч	0.25								
		Итого по расценке					424.10		4.67		61	
		ФОТ							2.83		50	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			2.69		48	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	65		65			1.84		33	
		Всего по позиции							9.20		142	
46	ТССЦ 204-0013	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 14 мм	т	0.001331		0.001331	6 890.00		9.17	4.29	39	
		Формула ценообразования: 6686.74 + 69.53 + 133.73(2%)	
		Всего по позиции							9.17		39	
47	ТЕР 19-01-013-02	Установка затворов гидравлических диаметром до 100 мм. Крана подземного ПЭ	1 прибор, устройство	1		1					8 385	
	1	ОТ					70.74		70.74	17.61	1 246	
	3	ЭМ					12.59		12.59	8.02	101	
	2	в т. ч. ОТм					0.16		0.16	17.61	3	
	4	М					1 640.60		1 640.60	4.29	7 038	
		ЗТ	чел.-ч	5.88		5.88						
		ЗТм	чел.-ч	0.01		0.01						
		Итого по расценке					1 723.93		1 723.93		8 385	
		ФОТ							70.90		1 249	
	МДС 81-33.2004	НР	%	128		128			90.75		1 599	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	83		83			58.85		1 037	
		Всего по позиции							1 873.53		11 021	
48	Прайс.	Кран шаровой PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, 90 мм (18000/4.29*1.05)	шт.	1		1			4 405.59	4.29	18 900	
		Корректировка М					=4405.59440559441					
		Всего по позиции							4 405.59		18 900	
49	ТЕР 24-01-033-02	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	1 шт.	2		2					444	
	1	ОТ					12.27		24.54	17.61	432	
	3	ЭМ								8.02		
	2	в т. ч. ОТм								17.61		
	4	М					1.44		2.88	4.29	12	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	1								
		ЗТ	чел.-ч	1.07		2.14						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					13.71		27.42		444	
		ФОТ							24.54		432	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			31.90		562	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			21.84		384	
		Всего по позиции							81.16		1 390	
50	ТССЦ 302-0220	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм	шт.	2		2	165.02		330.04	4.29	1 416	
		Формула ценообразования: 161.21 + 0.59 + 3.22(2%)	
		Всего по позиции							330.04		1 416	
51	ТЕР 24-02-081-01	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	1 установка	1		1					2 389	
	1	ОТ					18.31		18.31	17.61	322	
	3	ЭМ					71.80		71.80	8.02	576	
	2	в т. ч. ОТм					4.08		4.08	17.61	72	
	4	М					347.60		347.60	4.29	1 491	
		ЗТ	чел.-ч	1.54		1.54						
		ЗТм	чел.-ч	0.25		0.25						
		Итого по расценке					437.71		437.71		2 389	
		ФОТ							22.39		394	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			29.11		512	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			19.93		351	
		Всего по позиции							486.75		3 252	
52	ТЕР 24-02-005-02	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	1 отвод	2		2					2 378	
	1	ОТ					16.54		33.08	17.61	583	
	3	ЭМ					15.14		30.28	8.02	243	
	2	в т. ч. ОТм								17.61		
	4	М					180.90		361.80	4.29	1 552	
	ТССЦ 507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.	1								
		ЗТ	чел.-ч	1.18		2.36						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					212.58		425.16		2 378	
		ФОТ							33.08		583	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			43.00		758	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			29.44		519	
		Всего по позиции							497.60		3 655	
53	ТССЦ 507-0760	Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	2		2	385.00		770.00	4.29	3 303	
		Формула ценообразования: 377.25 + 0.21 + 7.55(2%)	
		Всего по позиции							770.00		3 303	
54	ТЕР 16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.01		0.01					225	
	1	ОТ					375.87		3.76	17.61	66	
	3	ЭМ					67.61		0.68	8.02	5	
	2	в т. ч. ОТм					2.45		0.02	17.61		
	4	М					3 598.53		35.99	4.29	154	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	П		П						
	ТССЦ 301-9240	Крепления	кг	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	30.91		0.31						
		ЗТм	чел.-ч	0.15								
		Итого по расценке					4 042.01		40.43		225	
		ФОТ							3.78		66	
	МДС 81-33.2004	НР	%	128		128			4.84		84	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	83		83			3.14		55	
		Всего по позиции							48.41		364	
55	ТССЦ 103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1		1	35.20		35.20	4.29	151	
		Формула ценообразования: 34.37 + 0.14 + 0.69(2%)	
		Всего по позиции							35.20		151	
56	ТЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.000785		0.000785					2	
	1	ОТ					71.47		0.06	17.61	1	
	3	ЭМ					10.15		0.01	8.02		
	2	в т. ч. ОТм					0.12			17.61		
	4	М					250.36		0.20	4.29	1	
		ЗТ	чел.-ч	5.31								
		ЗТм	чел.-ч	0.01								
		Итого по расценке					331.98		0.27		2	
		ФОТ							0.06		1	
	МДС 81-33.2004	НР	%	90		90			0.05		1	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	70		70			0.04		1	
		Всего по позиции							0.36		4	
57	ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.000785		0.000785					2	
	1	ОТ					43.93		0.03	17.61	1	
	3	ЭМ					6.80		0.01	8.02		
	2	в т. ч. ОТм					0.12			17.61		
	4	М					388.48		0.30	4.29	1	
		ЗТ	чел.-ч	3.83								
		ЗТм	чел.-ч	0.01								
		Итого по расценке					439.21		0.34		2	
		ФОТ							0.03		1	
	МДС 81-33.2004	НР	%	90		90			0.03		1	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	70		70			0.02		1	
		Всего по позиции							0.39		4	
58	ТЕР 24-02-120-02	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм	100 м трубопровода	2.82		2.82					532	
	1	ОТ					4.99		14.07	17.61	248	
	3	ЭМ					12.55		35.39	8.02	284	
	2	в т. ч. ОТм					2.43		6.85	17.61	121	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	0.41		1.16						
		ЗТм	чел.-ч	0.20		0.56						
		Итого по расценке					17.54		49.46		532	
		ФОТ							20.92		369	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			27.20		480	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			18.62		328	
		Всего по позиции							95.28		1 340	
59	ТЕР 24-02-121-02	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм	1 узел	1		1					1 992	
	1	ОТ					64.93		64.93	17.61	1 143	
	3	ЭМ					85.41		85.41	8.02	685	
	2	в т. ч. ОТм								17.61		
	4	М					38.14		38.14	4.29	164	
	ТССЦ 302-9232	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные	шт.	0.05								
		ЗТ	чел.-ч	5.34		5.34						
		ЗТм	чел.-ч									
		Итого по расценке					188.48		188.48		1 992	
		ФОТ							64.93		1 143	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			84.41		1 486	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			57.79		1 017	
		Всего по позиции							330.68		4 495	
60	ТЕР 24-02-122-02	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм	100 м газопровода	2.82		2.82					216	
	1	ОТ					1.46		4.12	17.61	73	
	3	ЭМ					6.33		17.85	8.02	143	
	2	в т. ч. ОТм					0.73		2.06	17.61	36	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	0.12		0.34						
		ЗТм	чел.-ч	0.06		0.17						
		Итого по расценке					7.79		21.97		216	
		ФОТ							6.18		109	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			8.03		142	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			5.50		97	
		Всего по позиции							35.50		455	
61	ТЕР 24-02-124-01	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм	1 участок испытания газопровода	1		1					9 400	
	1	ОТ					170.24		170.24	17.61	2 998	
	3	ЭМ					798.21		798.21	8.02	6 402	
	2	в т. ч. ОТм					85.12		85.12	17.61	1 499	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	14.00		14.00						
		ЗТм	чел.-ч	7.00		7.00						
		Итого по расценке					968.45		968.45		9 400	
		ФОТ							255.36		4 497	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			331.97		5 846	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			227.27		4 002	
		Всего по позиции							1 527.69		19 248	
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		21 675.72		117 218	
		в том числе					
		оплата труда		1 249.97		22 014	
		эксплуатация машин и механизмов		2 032.69		16 302	
		материальные ресурсы		18 393.06		78 902	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		1 377.46		24 258	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		1 784.09		31 421	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		1 217.72		21 443	
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		24 677.53		170 082	
Раздел 4. Восстановление щебеночного покрытия	
62	ТЕРр 68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	0.1		0.1					793	
	1	ОТ					182.78		18.28	17.61	322	
	3	ЭМ					587.26		58.73	8.02	471	
	2	в т. ч. ОТм					71.38		7.14	17.61	126	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	18.37		1.84						
		ЗТм	чел.-ч	4.65		0.47						
		Итого по расценке					770.04		77.01		793	
		ФОТ							25.42		448	
	МДС 81-33.2004	НР	%	104		104			26.44		466	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			15.25		269	
		Всего по позиции							118.70		1 528	
63	ТЕР 27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.02		0.02					3 267	
	1	ОТ					385.21		7.70	17.61	136	
	3	ЭМ					5 678.70		113.57	8.02	911	
	2	в т. ч. ОТм					793.73		15.87	17.61	279	
	4	М					25 872.30		517.45	4.29	2 220	
		ЗТ	чел.-ч	37.29		0.75						
		ЗТм	чел.-ч	49.92		1.00						
		Итого по расценке					31 936.21		638.72		3 267	
		ФОТ							23.57		415	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			33.47		589	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			22.39		394	
		Всего по позиции							694.58		4 250	
64	ТЕР 27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	1000 м2 основания	0.6		0.6					5 373	
	1	ОТ								17.61		
	3	ЭМ					267.50		160.50	8.02	1 287	
	2	в т. ч. ОТм					36.45		21.87	17.61	385	
	4	М					1 587.60		952.56	4.29	4 086	
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	2.51		1.51						
		Итого по расценке					1 855.10		1 113.06		5 373	
		ФОТ							21.87		385	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			31.06		547	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			20.78		366	
		Всего по позиции							1 164.90		6 286	
65	ТЕР 27-06-024-02	Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см	1000 м2 покрытия и основания	0.02		0.02					2 654	
	1	ОТ					605.71		12.11	17.61	213	
	3	ЭМ					2 182.13		43.64	8.02	350	
	2	в т. ч. ОТм					294.18		5.88	17.61	104	
	4	М					24 374.30		487.49	4.29	2 091	
		ЗТ	чел.-ч	58.13		1.16						
		ЗТм	чел.-ч	19.19		0.38						
		Итого по расценке					27 162.14		543.24		2 654	
		ФОТ							17.99		317	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			25.55		450	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			17.09		301	
		Всего по позиции							585.88		3 405	
66	ТССЦпг 01-01-02-034	Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	13		13					74	
	1	ОТ								1		
	3	ЭМ					2.79		36.27	1	36	
	2	в т. ч. ОТм					1.85		24.05	1	24	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч									
		ЗТм	чел.-ч	0.15		1.98						
		Итого по расценке					5.75		74.75		74	
		ФОТ							24.05		24	
	МДС 81-33.2004	НР	%	100		100			24.05		24	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			14.43		14	
		Всего по позиции							74.75		74	
67	ТССЦпг 03-01-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км	1 т груза	13		13	25.73		334.49	1	334	
		Всего по позиции							334.49		334	
68	ТЕРр 68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.04		0.04					727	
	1	ОТ					745.40		29.82	17.61	525	
	3	ЭМ					630.46		25.22	8.02	202	
	2	в т. ч. ОТм					114.30		4.57	17.61	80	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	68.26		2.73						
		ЗТм	чел.-ч	9.40		0.38						
		Итого по расценке					1 375.86		55.04		727	
		ФОТ							34.39		605	
	МДС 81-33.2004	НР	%	104		104			35.77		629	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			20.63		363	
		Всего по позиции							111.44		1 719	
69	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.04		0.04					1 252	
	1	ОТ					813.30		32.53	17.61	573	
	3	ЭМ					95.30		3.81	8.02	31	
	2	в т. ч. ОТм					11.10		0.44	17.61	8	
	4	М					3 778.21		151.13	4.29	648	
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100								
		ЗТ	чел.-ч	76.08		3.04						
		ЗТм	чел.-ч	0.68		0.03						
		Итого по расценке					4 686.81		187.47		1 252	
		ФОТ							32.97		581	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			46.82		825	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			31.32		552	
		Всего по позиции							265.61		2 629	
		Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		3 023.78		14 474	
		в том числе					
		оплата труда		100.44		1 769	
		эксплуатация машин и механизмов		405.47		3 252	
		материальные ресурсы		2 108.63		9 045	
		перевозка		409.24		408	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		156.21		2 751	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		199.11		3 506	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		127.46		2 245	
		Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		3 350.35		20 225	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		226 498.88		1 455 101	
		в том числе					
		оплата труда		5 209.89		91 749	
		эксплуатация машин и механизмов		111 962.20		897 936	
		материальные ресурсы		108 236.64		464 329	
		перевозка		1 090.15		1 087	
		Всего ФОТ (справочно)		8 736.76		153 856	
		Всего накладные расходы		9 825.45		173 033	
		Всего сметная прибыль		5 009.12		88 212	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		241 333.45		1 716 346